우편번호 : 54004

주소 : 전라북도 군산시 새만금북로 466

새만금개발공사

건설공사 안전점검 수행기관 지정공고

◦ 모집기간 : 2024. 2. 29. (목) ~ 3. 13. (수) 18:00까지

「건설기술 진흥법」제62조, 동법 시행령 제100조, 제100조의2 및「건설공사 안전관리 업무수행 지침」제18조에 따라 새만금개발공사에서 발주하는 건설공사의 안전점검 수행기관 지정공고를 아래와 같이 공고합니다.

○ 모집절차 및 지원방법 문의 : 재난·안전관리센터 송준범 대리 (☎ 063-440-6836)

2024년 2월 29일

새만금개발공사 사장

Ⅰ		공고명

「새만금 스마트 수변도시 1단계 조성공사」 안전점검 수행기관 지정공고

Ⅱ		공사 개요

공 사 명 : 「새만금 스마트 수변도시 1단계 조성공사」

공사위치 : 새만금 사업지역 복합개발용지 내 선도지구 일원

(전라북도 김제시 진봉면 심포리 2415)

공사기간 : ‘23. 5. 15. ~ ’26. 7. 13.

시 공 자 : 남광토건㈜ 외 6개사

건설사업관리 : ㈜도화엔지니어링 외 3개사

공사금액 : 금 230,186백만원(부가가치세 포함),

* 도급액: 172,587백만원, 관급자재 등 : 57,655백만원

Ⅲ		안전점검 개요

안전점검 대상(「건설기술 진흥법 시행령」제98조제1항, 제101조의2제1항)

ㅇ 천공기가 사용되는 건설공사(10m이상)

ㅇ 항타 및 항발기가 사용되는 공사

ㅇ 1종 및 2종 시설물(교량)

ㅇ 지하 10m 이상 굴착공사

ㅇ 높이 5m 이상 동바리, 높이 2m 이상 흙막이

점검비용 : 금 229,960,500원(부가가치세 포함, 안전관리비 중 안전점검 비용)

안전점검 수행 예정표 (공정진행 상황에 따라 변동 가능)

점검명 (구조물명)		정기점검			초기점검	합계
		1차	2차	3차
교량	진입1교	1 (기초공사중) (‘24. 6月)	1 (하부공사중) (‘24. 8月)	1 (상부공사중) (‘25. 5月)	1 (준공시) (‘26. 7月)	4
	진입2교	1 (기초공사중) (‘24. 8月)	1 (하부공사중) (‘24. 10月)	1 (상부공사중) (‘25. 5月)	1 (준공시) (‘26. 7月)	4
10m 이상 굴착(오수중계펌프장)	제1펌프장	1 (가시설 및 기초공사중) (‘24. 11月)	1 (되메우기 완료후) (‘25. 12月)	-	-	2
	제2펌프장	1 (가시설 및 기초공사중) (‘24. 12月)	1 (되메우기 완료후) (‘25. 12月)	-	-	2
연약지반(천공기)		1 (최초전공시) (‘24. 3月)	1 (천공기 작업말기) (‘24. 11月)	-	-	2
항타 및 항발기 (교량 외 항타)	진입1교 (가교포함)	2 (최초천공시) (‘24. 6月) (‘24. 5月-가교)	2 (항타기 작업말기) (‘24. 6月) (‘24. 5月-가교)	-	-	2
	진입2교 (가교포함)	2 (최초천공시) (‘24. 7月) (‘24. 6月-가교)	2 (항타기 작업말기) (‘24. 7月) (‘24. 6月-가교)	-	-	2
	제1,2오수 중계펌프장	2 (최초천공시) (1-‘25. 2月) (2-‘25. 3月)	2 (항타기 작업말기) (1-‘25. 2月) (2-‘25. 3月)	-	-	2
높이 5m이상 동바리 (중계펌프장)	제1펌프장	1 (최고높이 설치완료시) (‘25. 8月)	1 (최대단면 설치완료시) (‘25. 12月)	-	-	2
	제2펌프장	1 (최고높이 설치완료시) (‘25. 10月)	1 (최대단면 설치완료시) (‘25. 12月)	-	-	2
높이2미터 이상 흙막이	오수시트 파일 흙막이	1 (가시설공사초중기) (‘25. 2月)	1 (가시설공사 말기) (‘25. 10月)	-	-	2
합계		14	14	2	2	32

* 상기 일정은 공사 진행에 따라 변동될수 있음

안전점검은 「건설기술 진흥법 및 동법 시행령」, 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 등 관련 규정 기준을 따르며, 점검완료 후 종합보고서 제출

Ⅳ		신청자격

새만금개발공사 건설공사 안전점검 수행기관 등록명부에 등록된 업체

* 붙임 1 公社 건설공사 안전점검 수행기관 등록명부 공개(‘23.10.6.) 참고

점검대상 건설공사를 발주ㆍ설계ㆍ시공 또는 건설사업관리를 수행하는 자와 그 계열 회사인 안전점검기관은 참여할 수 없음.

안전점검 수행기관 지정요청서 접수마감일(다만, 안전점검 수행기관으로 지정된 자는 계약체결일)까지 국토교통부 시설물통합정보관리시스템(FMS)에 등록상태가 ‘정상’ 상태인 업체

Ⅴ		안전점검 수행기관 지정 방법

붙임 2 사업수행능력 평가방법 및 세부기준에 따라 평가하며 평가 합계가 가장 높은 기관을 수행기관으로 지정하되, 최고점이 2개 이상인 경우 제안 가격이 가장 낮은 기관 지정

구분	심사항목	배점	심사방법
평가항목	수행능력 평가	30점	평점 = 평가점수 X 30%
	제안가격 평가	70점	붙임 2 평가산식에 따른 산정
합계	100점

ㅇ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 지정된 안전점검 수행기관의 제출서류 등이 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 작성된 것으로 판명 된 때에는 지정결정 취소 및 명부에서 제외되며, 차순위자를 안전점검 수행기관으로 지정

ㅇ 지정된 안전점검 수행기관을 공사 홈페이지 공개하고 「건설기술진흥법 시행령」 제100조의2에 따라 시공자에 지정 통보서 송부

ㅇ 안전점검 수행기관으로 지정된 경우 통보일로부터 7일 이내에 시공자와 계약을 체결하여야 하며, 계약체결 가격은 지정된 업체의 제안 가격으로 함

Ⅵ		신청서 제출 일시 및 방법

접수기간 : ‘24. 2. 29.(목) ~ ’24. 3. 13.(수) 18:00

접수방법 : 방문 및 우편 접수 원칙(방문접수 전 담당자 사전 연락)

* 접수 마감일시 우체국 소인 및 택배 운송장 기록분 접수 유효

** 접수 담당자 : 재난·안전관리센터 송준범 대리(063-440-6836)

*** 마감일시까지 접수여부를 담당자에게 확인 必, 미확인으로 인한 불이익 및 책임은 응모자에게 있음.

접수장소 : 전라북도 군산시 새만금북로 466 새만금개발공사 재난·안전관리센터

제출서류 * 붙임 5 지정신청 제출 서류 양식 참고

1) 안전점검 수행기관 지정신청서 1부(서식1)

2) 안전점검 수행기관 가격제안서 1부(서식2)

3) 사업수행능력평가 신청서(서식3) 및 증빙자료 각 1부.

4) 사업수행능력 자기평가표(서식4)

5) 서약서(서식5)

6) 기타 증빙자료 각 1부. * 사본으로 제출하는 모든 서류는 하단 여백에 원본대조필 날인

- 안전진단전문기관등록증, 사업자등록증, 인감증명서, 사용인감계

Ⅶ		안전점검 수행기관 지정 일정

구분	일정	비고
안전점검 수행기관 지정공고	2024. 2. 29.(목) 15:00	- 새만금개발공사 홈페이지(공고) - 신청자격 : 公社 등록명부 등재 업체
지정 신청서 등 제출서류 접수⦁마감	2024. 2. 29.(목) 15:00 ∼ 2024. 3. 13.(수) 18:00	- 방문, 우편 접수 원칙(접수확인 必) * 접수처 : 재난·안전관리센터
안전점검 수행기관 심사(평가) 및 지정	2024. 3. 14.(목) 09:00 ∼ 2024. 3. 21.(목) 18:00	붙임 2 사업수행능력 평가방법 및 세부기준에 따라 평가
안전점검 수행기관 지정 공개	2024. 3. 21.(목) 18:00	- 새만금개발공사 홈페이지(공개)

Ⅶ		유의사항

제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 응모서류가 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 작성된 것으로 판명된 때에는 안전점검 수행기관 명부에서 제외하고 당해 안전점검 수행기관 지정 결정을 취소할 수 있습니다.

제출서류는 정확하게 작성되어야 하고, 각 평가기준에 따른 증빙서류가 첨부되어야 하며, 증빙서류가 첨부되지 않았거나 내용이 불분명하여 확인이 불가능한 경우에는 해당 평가사항은 인정하지 아니합니다.

모든 증빙서류는 공고일 이후에 발급 또는 작성된 것을 제출하여야 한다.

점검기관으로 지정된 기관이 부적격자로 판명되어 점검기관 지정이 취소된 경우에는 당초 심사 시 차 순위자를 점검기관으로 결정한다.

제출된 서류에 한하여 평가하며, 제출된 서류의 누락·오기 등으로 인한 불이익은 신청자에게 있고, 수행기관으로 지정되지 아니한 신청자에게는 지정결과를 별도 통보하지 않습니다.

안전점검 수행기관으로 지정받은 자가 시공자와 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 안전점검 수행기관 등록명부에서 제외하며, 차기 모집 공고 대상에서도 제외합니다.

세부 일정은 추진상황에 따라 변경될 수 있습니다.

본 공고문에 명기되지 않은 사항에 대해서는 「건설기술 진흥법」 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 규정을 우선 적용합니다.

기타 자세한 사항은 새만금개발공사 재난·안전관리센터 송준범 대리(☎063-440-6836)에 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 새만금개발공사 건설공사 안전점검 수행기관 등록명부 1부.

2. 사업수행능력 평가방법 및 세부기준 1부.

3. 사업수행능력평가서 작성지침 1부.

4. 안전점검 대상 시설물 현황 및 주요공정 예정공정표 1부.

5. 지정신청 제출 서류 양식 1식.  끝.